설 계 과 업 지 시 서

『서산의료원 주차시설 설치공사 설계용역』

2020. 09.

목      차

1. 용   역   명

2. 용 역 목 적

3. 용 역 개 요

가. 대지위치

나. 건물규모

다. 주용도

라. 공사비

마. 용역범위

바. 용역기간

사. 기타

4. 과업의 기본방향

5. 과업 일반지침

가. 일반사항

나. 공사중 각종 대책

다. 특별사항

6. 분야별 세부 설계지침

가. 일반사항

나. 사전조사 검토사항

다. 분야별 세부 계획

7. 설계도서 작성

가. 일반사항

나. 세부내용

8. 보고회 개최

가. 일반사항

나. 기본설계 완료 보고회

다. 실시설계 완료 보고회

9. 성과품 납품목록

가. 기본설계

나. 실시설계

10. 면적표(Space Program)

11. 증축위치도

설 계 과 업 지 시 서

1. 용 역 명 : 충청남도서산의료원 주차시설 설치공사 설계용역

2. 용역목적

충청남도 서산의료원의 부족한 주차공간 해소를 위하여 주차장 부지 내에 “서산의료원  주차시설 설치공사”를 추진하여 주차면수가 부족한 열악한 주차환경을 개선하여 방문객의가중되는 불편을 해소하고 주차장 시설의 효율을 높여 주차편의를 제공하는 데 그 목적이 있음.

3. 용역개요

가. 증축위치 : 충남 서산시 중앙로 149번지내

나. 건물규모

(1) 주차장 규모 : 주차면수 200면 (부지면적 2,117.8㎡), 원내 주차 272대 이상

※ 건축연면적 등 공사규모 및 공사비는 설계과정에서  발주기관과 계약상대자의 협의에          따라 변경 될 수 있으며, 공사비는 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 통신, 조경, 측량, 인테          리어, 폐기물 처리비 등이 포함된 비용임.

※ 주차관제시스템, 주차정보시스템, 주차유도 시스템 등 세부시설물은 협의 후 변경 될 수 있음.

(2) 구조방식 : 철골조(공작물) 또는 철근콘크리트

다. 주용도 : 의료시설(주차시설)

라. 공사비 : 금3,652,000천원 예정(부가가치세 포함)

※ 공사비 산출은 “7. 설계도서 작성/나. 세부내용/(2)공사비 산출”에 명기된 내용에 의하며 부득이 예산상 공사비를 초과할 경우에는 발주부서에 그 사유와 해결대안을 제시하여야 한다.

마. 용역범위

1) 주차장 신축공사와 관련한 건축, 토목, 설비, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등           전 분야의 설계지침에 따른 기본설계 및 실시설계 도서의 작성, 도시계획시설 인가           및 지질조사 등 각종 인․허가에 필요한 서류작성·제출, 제반협의, 인․허가 처리 포함

2) 용역수행의 순서는 기본설계와 실시설계 및 행정인허가(건축협의, 건축물대장 생성)업무를      구분 시행하며 본 과업지시서는 서산의료원의 “서산의료원 주차시설 증축공사”에       따른 기본설계 및 실시설계의 용역과업에 적용하고 성과품은 기본설계 및 실시설계       완료 시 제출하여야 한다.

(1) 기본설계

서산의료원(이하 “본원”라 한다)에서 제시하는 운영계획, 공사 중 주차운영계획, 소요면적 등 과업지시서의 내용, 각종 자료를 토대로 하여 건축사 자신의 창의로서 배치 평면, 개략공사비, 공사기간 등의 기본적인 내용의 계획을 입안한 기본설계를 본원과 협의한 후 관계법령에 적합하도록 설계도서를 작성한다.

(2) 실시설계

기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 설계도서에 표기한 것으로 건설기술관리법령, 건설업법령 및 각종 규정 등에 위배되지 않아야 하고 상기법령에 의한 심의 또는 검토, 보완 요구시는 이에 응하여야 하며, 설계 납품 후 물가 및 노임상승 등의 사유가 발생되어 본원의 요구가 있을 시 공사 발주 전까지 새로운 설계내역서를 작성 제출하여야 한다.

(3) 인․허가(협의) 사항

(가)본 용역의 성과품이 납품 후 공사 시행 전 필요한 관계기관 인․허가 협의(설계도서   지원) 및 건축협의 업무 완료와 건축물 준공 후  건축물대장 생성 업무 등 인․허가      (협의) 사항을 수행하여야 한다.

(나)필요시 건축허가(협의)와 국립중앙의료원 공공보건의료지원센터에서 실시하는 설계       심의에 관련된 도서의 작성, 제출서류 업무대행 및 실시설계 심의통과까지를 과업범위      로 한다.

(4) 세부 용역범위

(가) 현장조사 및 자료수집(현지답사, 측량, 지장물조사)

(나) 지반조사 및 지질조사서 작성

(다) 구조검토 및 구조(내진)계산서 작성

(라) 건축계획(안) 수립 및 설계도서 작성

(마) 현황조사 및 실태분석, 각종 회의 및 심사 등에 필요한 자료 작성

(바) 건축협의 업무 완료와 건축물 준공 후  건축물대장 생성 업무 등 인․허가(협의)

(사) 필요시 도시관리계획 시설 관리계획변경 및 실시계획인가 등 절차 이행

(아) 공정표, 투시도, 조감도 제작 및 작성

(자) 기타 발주처가 요구하는 필요 제반 도서 작성

※ 설계용역업자는 설계용역손해배상보험에 가입하여야 한다

- 가입기간: 건설공사의 착공일부터 용역완료일까지 기간

- 보험증서 제출시기: 기본설계 및 실시설계 용역을 완료하기 전

바. 용역기간

(1) 착수일로부터 90일간(기본설계 30일, 실시설계 60일),심의기간은 별도 정산하여야 하며           용역업체에서 공문을 통해 일시 중지요청을 하여야 한다.

(2) 용역자는 본원에서 필요하여 용역과업 중 부분납품을 요구할 시는 이에 우선적으로 응하여야 하며, 이를 거부 할 수 없다.

(3) 본원 사업계획(규모, 구조방식 등)이 변경 될 경우 용역자와 본원이 상호협의하여 용역기간을 연장 할 수 있다. 단, 본원에서 협의 후 승인한 기간에 대해서만 연장 할 수 있다.

사. 기 타

본 과업의 실별 용도 및 면적은 본원의 요구에 적합하도록 하되 향후 각종 설계 보고회 등으로 전문가의 의견이 반영될 시 협의 조정될 수 있다.

4. 과업의 기본방향

본 설계는 주차공간 확보를 위하여 주차환경을 개선할 수 있도록 관련 전문가와 기술적 논의를 거쳐 최상의 목적물을 설계 및 시공이 되도록 하여야 하며, 예산범위 내에서 최대한 경제적인 설계와 공기단축이 가능한 공법 등이 적용되어야 한다.

5. 과업 일반지침

가. 일반사항

(1) 수급인은 본 과업을 성실히 수행하여야 하며 기존 건물과의 조화를 통한 미적인 건물이 되도록 설계하고 본 과업의 질적 향상에 노력하여야 한다.

(2) 수급인은 계약 체결 후 과업을 착수하여야 하며 착수하기 전에 착수신고서, 세부 시행계획서(분야별 세부공정계획 및 업무흐름도 포함), 분야별 참여기술자 투입계획서 및 보안대책, 보안각서 등 기타 용역 수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

(3) 수급인은 착수신고서를 제출할 때에는 다음 내용의 서류를 첨부하여야 한다.

(가) 용역 책임기술자의 선임신고서(이력서, 기술자 면허수첩 사본첨부)와 분야별 참여 기술자(건축, 토목 등)명단, 자격증사본, 이력서

(나) 예정공정표

(다) 기타 법령이나 용역과업에서 제출토록 한 사항

(4) 설계 추진실적과 예정사항에 대한 다음사항을 이행하여야 한다.

(가) 추진계획 보고(대표건축사) - 착수일로부터 3일 이내

(나) 기본설계 완료보고 - 설계 완료전(감독관의 검토를 받아 보고)

(다) 수시보고 및 협의 - 감독관의 요청이 있을 때

(라) 최종보고 - 최종도면 및 내역서를 감독관의 검토를 받아 보고

(5) 수급인은 각종 행정 절차상의 승인, 협의, 협약, 인․허가를 완료할 수 있도록 제반의  조치를 취하여야 하며 필요시 관계기관의 협의에 따른 필요한 보완 관련 자료를 작성  제출하여야 하며 납품 후라도 행정절차 이행이 완료되도록 하여야 한다.

(6) 수급인은 수행과정에 있어서 제반규정에 의한 관련기관 및 부서와 충분한 협의를 하  여야 하며 협의에 따른 소요비용은 수급인 부담으로 한다.

(7) 수급자는 다음사항에 대하여 본원의 사전 승인을 받아 설계에 반영하여야 한다

(가) 과업수행계획서 및 착수신고서의 변경

(나) 관계기관 및 부서의 협의사항

(다) 감독관의 지시사항

(라) 기타 수급자가 중요하다고 판단하는 사항

(8) 본 과업지시는 과업수행을 위한 사항을 규정하였는바 이에 규정되지 아니한 사항은  국가계약관련법령과 정부제정 각종 시방서에 준하되 수시 감독관과 협의하여 수행하여야 한다.

(9) 과업 수행 중 정책변경 등 불가피한 경우에 본원은 본 용역의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있고, 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항 및 추가사항이라도 본원이 필요하다고 인정하는 중요한 사항은 설계에 반영하여야 한다.

(10) 본 과업수행을 위한 국내의 선진사례 및 전문기술을 활용키 위하여 선진시설 및 사  례를 시찰하여 충분한 자료을 수집 후 설계의 질을 높이고 안전하고 경제적이며 최  신기술 및 시설을 본 설계에 반영하도록 한다.

(11) 수급인은 설계상의 중대한 하자로 인하여 용역 또는 공사 진행상 상당한 피해를 초   래 하였을 경우 관계법령에 의거 이에 대한 책임을 진다.

(12) 과업의 일부를 하도급 할 경우 관계법령에 의한 전문 설계용역 업체에 하도급을 하   여야 하고 사전 각 분야 감독관의 승인을 받아 하도급 신고를 필한 후 하도급 용역  자의 참여기술진 현황을 제출하여야 한다.

(13) 본 과업과 관련 건축, 토목, 전기, 통신, 기계(소방포함) 등 기타 관련분야의 감독관과 긴밀히 협조하여 그 지시 및 승인에 의한 설계추진에 착오가 없도록 하여야 하며 과업의 완료 후라도 본원의 요구가 있을 때에는 적극 협조하여야 한다.

(14) 수급인은 본 설계과업을 수행함에 있어 현장을 필히 답사하여 환경피해를 최소화 하고 예산범위 내에서 최대한 경제적인 설계를 하여야 한다.

(15) 수급인은 보고회 및 각종 심의, 승인, 인가 등에 필요한 경우 기술자를 대동하고 기술적 사항에 대하여 본원을 대신하여 질의에 답변하여야 한다.

(16) 수급인은 과업수행중 보고회, 건설기술심의 등 각종 심의, 승인, 인가에 필요한 자료제출 요구시 이에 응하여야 하며 자료제출 등으로 인한 비용은 수급인이 부담한다.

(17) 본 과업수행 과정에서 작성되는 각종 도서는 본원의 승인을 얻어야 하고 승인을     받아 작성된 도서라 할지라도 그 내용이 미비, 과오, 기술상 오류 등 결함에 대하여  수급인의 책임은 면제될 수 없으며 제3자에 의하여 작성된 각종 도서의 용역성과를  첨부하는 경우도 또한 같다.

(18) 본 과업수행을 위하여 수급인은 다음의 사항을 준수하여야 한다.

(가) 납품된 성과물의 저작권은 본원의 소유로 한다.

(나) 모든 성과품은 본원의 허락없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출하    여서는 안된다.

(다) 과업의 폐기물은 소각 처리하여야 하며 보안이 필요한 작업용 사진 등은 본원에 제출하여야 한다.

(라) 기타 보안상 하자가 없도록 하여야 하며 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책   임은 수급인이 진다.

(19) 보고서 앞 부분에 분야별 책임 기술자가 연대 서명 날인하여야 한다.

(20) 설계내역서 및 단가산출서는 지정된 전산프로그램을 사용 작성하여야 하며 공사입찰을 위한 CD 제작 요청이 있을 경우 협조하여야 한다.

(21) 과업진척 보고는 착수 후 7일 이후부터 주간보고(매주 월요일)를 하되 감독관이 필요하다고 지시하는 경우 제반 추진내용을 책임 용역자가 직접 보고 하여야 한다.

(가) 과업 추진내용 및 공정현황

(나) 과업 수행상 문제점 및 대책

(다) 과업 수행실적 및 차기 수행계획

(라) 관련부서 협의사항

(마) 기타 필요한 사항

(22) 시공될 주요자재에 대하여는 본원과 사전 협의하여 결정하여야 하며 예산범위 내에서 최대한 경제적인 설계가 되어야 한다.

(23) 과업 착수 시 또는 과업수행 중 해당 설계용역 수행자가 설계과업 수행에 부적당 하  다고 판단 될 때에는 감독관이 즉시 교체 요구할 수 있으며 수급자는 이에 응하여야  한다.

(24) 수급자는 본 과업지시서 내용과 본 용역시행 관련 전반사항을 숙지하여야 하며 이   를 숙지하지 아니하여 발생되는 사항에 대하여는 수급자가 책임을 지며 기타 경미  한 사항 및 누락된 부분에 대하여는 협의시행 하여야 한다.

나. 공사 중 각종 대책

(1) 공사시에는 차량의 교통소통 및 안전에 지장이 없도록 하여야 하며 필요시 공사 중 교통 안전대책을 수립 후 설계에 반영하여야 한다.

(2) 공사 시행중 환경에 미치는 악영향에 대한 방지방안을 제시하여야 한다.

다. 특별사항

(1) 용역기간 연장

다음과 같이 부득이한 경우에는 용역기간을 연기할 수 있다.

(가) 추가과업, 특별업무수행, 조사물량 증가 등으로 용역기간 연장이 불가피하다고

발주청이 인정할 때

(나) 발주처의 사정으로 작업중지 또는 연기의 필요가 있을 때

(다) 기타 부득이한 사정으로 연기가 불가피하다고 발주청이 인정할 때

(2) 과업의 변경 및 정산

(가) 발주청이 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있    다고 인정할 때에는 수급자는 발주청의 방침에 따라야 한다.

(나) 용역비는 면적 또는 공사비가 증가하여도 추가 지급하지 아니한다. 단 용역비    산출시 부수적으로 산출된 추가업무비용 및 추정공사비가 감소될 시는 추후     계약금액 조정 또는 정산할 수 있다.

(3) 기타

(가) 다음과 같은 경우 일방적으로 계약을 해지할 수 있으며 이 경우 본원이 정하는 바에 따라 정산한다.

1) 과업수행이 불가능하다고 인정될 때

2) 본원의 지시에 불응할 때

3) 과업수행 중 본원의 정책변경 등 불가피한 사유로 인하여 본 용역을 더 이상 추진할 수 없을 때(이 경우 설계용역비는 상호 협의하여 정산 처리 함)

4) 기타 계약조건을 위배할 때

(나) 설계도서의 내용이 명확하지 않아 시공상세도가 추가 필요할 시에는 공사시행에 지장이 없도록 설계도서의 작성은 물론 필요시 기술지도를 하여야 하며. 이때 추가 업무보수는 지급하지 않는다.

6. 분야별 세부 설계지침

가. 일반사항

본 지침은 충청남도 서산의료원에 건립하는 「서산의료원 주차시설 증축공사」의 설계  범위 및 제반조건을 규정한 것으로 설계진행의 일관성을 유지하고 원활한 용역업무수행을 위한 지침을 정하는 데 목적이 있으며, 다음의 지침을 설계 진행시 준수하여야 한다.

(1) 본 지침에서 지시된 사항은 용역자 임의로 해석될 수 없으며 계약조건에 명시된 내용에 따른다.

(2) 당초 부지 내 장례식장 증축을 고려하여 주차장을 설계도서를 작성하여야 한다.

(3) 설계도서의 작성에 있어 친환경건축물 인증심사기준을 고려하여 분야별 사용자재를 적용하고 인증 기자재가 없는 경우는 KS 규격품을 적용하여 설계도서를 작성하여야 한다. 다만, 공사비 등의 증감 사유로 인하여 발주처와 협의한 경우는 그 협의된 결과에 따른다.

(4) 설계기준은 관계법규, 제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 설계지침에서 규제한 기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

(5)  본 지침에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한의 기준을 명시하여 어떠한 경우에도 자재 및 공법이 시공된 후에 동등이상 성능을 확보 할 수 있는 것이어야 한다.  특수자재, 공법의 적용으로 부득이 본 설계지침에 명시한대로 설계할 수 없는 경우 설계설명서(기본설계도서)에 그 적용부위, 자재, 공법의 명칭과 공인기관의 기술검토서 및 실험데이터 등 적용부위에 적합한 자재, 공법임을 인정할 수 있는 성능관련 입증자료를 명시하여야 하며, 시방서(실시설계도서)에 그 품질규격 및 시공방법 등이 명시되어야 한다.

(6)  주요 자재 및 품질관리 지침

(가) 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고, 주요자재공법에 대하여는 시방서(실시설계도서)에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

(나) 모든 공사용 자재는 국산자재의 사용을 최대한 고려하고, KS 표시품을 우선 사용하며, KS 표시품중 1, 2급으로 구분되는 경우는 1급을 사용한다.

KS규격 표시품이 없을 경우 KT, NT등 품질보증을 받은 것으로 대신하거나 어느 것도 없는 경우에는 시중에 생산되고 있는 제품 중 최고의 품질을 확보하여 계획한다.

(다) 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주기관의 승인을 득 하여야 하며, 자재품질은 관련 KS 규격 이상의 제품으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이하여야 한다.

(라) 시험방법 및 기준은 건설기술관리법 시행규칙 및 건설교통부 제정 공종별 표준 시방서에 따른다.

나. 사전조사 검토사항

용역자는 증축 예정 장소의 지장물 현황조사를 감독자의 승인을 득하여 실시하고 조사된 제반사항을 충분히 검토하여 설계에 반영하여야 하며, 그 조사결과를 문서로 제출한다.

(1) 급․배수계통의 조사

(가) 시수원의 조사

(나) 배수 및 오수처리 계통조사

(다) 도시가스 공급 관로 조사

(2) 동력 공급원의 조사

(가) 전원인입 조사

(나) 수․변전설비 용량 재검토 및 조사

(3) 통신 및 LAN 공급원 조사

(가) 인입위치 조사

(나) 전화기계실(교환기실 등) 및 통신선로 조사

(4) 소방 및 방송 공급원 조사

(가) 수신기 및 방송국 위치 조사

(나) 선로 구성관계 조사

(다) 소방 수원 및 배관 관계 조사

다. 분야별 세부 계획

(1) 건축계획

(가) 배치 및 평면계획

1) 향후 증축을 고려하여 적정 배치계획을 설계을 하여 설계를 제시하여야 하여 공사중인 복합병동 증축공사와 토목레벨을 고려하여 계획한다

2) Cost 비교 분석을 통하여 구조재 및 마감 자재계획을 구체적으로 하여 경제적인 설계가 되도록 한다.

3) 바닥은 주차장 시설임을 고려하여 진동 및 소음 방지를 위한 재료를 반영하여 설계하여야 한다.

4) 부지를 최대한 활용하여 계획하며 차량출입구는 경사로로 계획해서는 안된다

5) 주차시설 내 보행자 통로 및 계단은 차량동선과 분리하여 이동과 이용에 불편함이 없도록 안전하게 설치하여야 한다.

6) 부지의 인접부분이 주택지역임을 감안하여 소음발생에 대한 방음대책을 강구하여야 한다.

7) 토목 및 조경설계 부분의 협의가 필요할 경우에는 본원 토목 담당자와 협의하여 설계도서를 작성하여야 한다.

(나) 입․단면계획

1) 항온항습과 방염가능 제품인 마감재를 사용하여야 하며, 철골조 구조임을 감안하여 본 건물 주변건물과의 미관을 고려하여야 한다.

2) 단순한 외관보다는 현대 디자인과 병원 이미지를 고려할 수 있는 디자인 계획을 반영하여야 한다.

3) 외장마감재 등은 주차장 건물에 적합하고 경제적인 재료를 사용하도록 한다.

(다) 구조계획

1) 기능 및 시설구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

2) 향후 주차장 부족시 증축을 고려하여 안전하고 경제적인 구조(건축물 하중기준 등) 기준에 적합하여야 한다.

3) 대지의 지질조사를 실시하고 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 한다.

4) 관련법에 적정하도록 내진설계가 반영되어야 하며, 구조물에 대한 구조(내진)계산서를 제출하여야 한다.

(2) 전기 및 통신설비계획

(가) 전기 인입 계획

1) 전원 인입점 타당성 여부를 검토하여 계획한다.

2) 증축 건물에 안정적인 전기공급 방안을 계획하고 전기 공급에 있어 신뢰성, 안정성, 확장성을 고려한 계획을 한다.

(나) 간선설비 계획

1) 간선설비계획은 양질의 전기 공급를 위한 전압강하, 기계적강도, 전력예비율, 고조파발생 등을 고려한 계획이어야 한다.

2) 간선계획은 향후 부하증설의 수월성이 확보되도록 계획하여야 한다.

(다) 동력설비 계획

1) 동력설비는 설치 위치는 기계설비의 감시 및 조작하기 쉬운 곳으로 계획한다

2) 동력배관은 충격 및 방수를 고려한 배관계획이어야 한다.

3) 기계설비 계획을 전반적으로 파악하여 전기설계를 계획한다.

(라) 조명설비 계획

1) 적정한 설계를 위하여 명확한 조도계산을 하고 조도기준은 KS규격의 상위 값을 기준으로 계획한다.

2) 광원은 건축물 수준에 중요한 부분이므로 각 실의 용도, 구조, 쾌적성을 고려하여 계획한다.

3) 전등기구는 고효율인증기자재로 계획하고 눈부심이 최소화 되도록 계획한다.

(마) 전열설비 계획

1) 콘센트의 설치높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

2) 용도에 알맞은 전압을 선정하고, 콘센트를 설치한다.

(바) 소방전기설비 계획

1) 소방 전기설비는 제반 소방관계법규에 적합하도록 계획한다.

2) 자동화재탐지설비, 유도등설비, 비상방송설비, 비상조명등설비 등은 화재안전기준         에 적합하게 계획한다.

(3) 통신설비계획

(가) 전화 및 LAN 설비 계획

1) 인입 네트워크용 광케이블은 기존 건물에 인입되어 있는 광케이블 설치현황을 전반적으로 조사하여 광케이블 인입 장소 및 방법을 계획한다.

2) 네트워크 구성은  IDF를 구성하고 장비사양은 정보전산원과 협의하여 반영한다.

3) 전선관 배관 및 전선인입은 전화와 LAN 설비를 통합배선으로 계획한다.

(나) 방송설비 계획

1) 비상방송용 방송설비는 기존 건물과 연동하여 시설한다.

(다) 통합방법시스템설비 계획

1) 출입관리설비, CCTV설비 등을 설계 계획한다.

(4) 기계설비계획

(가) 소화설비(기계)

1) 소방설비의 기본계획은 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이 하도록하며 화재를 사전에 예방하고 화재가 발생한 경우에 조기에 감지, 진화할 수 있는 소방설비를 설계한다

2) 재료의 재질의 부식, 내구성, 견고성, 효율성 등을 파악하여 이용하고 정확한 제보를 발할 수 있는 장비 및 기기를 선택한다.

3) 고가의 중앙감시설비, 전기, 통신설비 설치지역에는 화재로부터 방호하기 위하여 가스계 소화설비를 설치함으로써 진화 후에도 장비의 손상이 가지 아니하도록 설계 하되 청정약제로 계획한다.

4) 화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부의 소화활동 없이도 자체 진화가 가능한 설비를 설계한다.

5) 특히 옥외 소화전함은 빗물 및 풍압 등에 의해 부식 및 파손되지 않도록 견고하며 내구성이 뛰어난 제품을 채택하고 시야 접근이 용이한 장소에 계획한다.

6) 쌍구형 송수구 등은 차량 진입이 용이한 장소로 선택한다.

7) 소화기는 비치함을 만들어 소화기를 비치하고 비상시에는 손쇱게 사용할 수 있도록 한다.

8) 방화구획을 관통하는 닥트부위에 방화댐퍼를 설계한다.

9) 옥내소화설비, 연결송수설비, 스프링클러설비, 제연닥트, 내진설비 등 각종 소방시설은 관련 소방법, 동시행령, 동시행규칙의 시설기준 등에 관한 규칙에 근거하여 설계한다.

10) 소방설비용 소화비상수원의 확보방안을 검토하여 계획한다

7. 설계도서 작성

가. 일반사항

(1) 모든 도면은 AUTO CAD(지정 버전)로 작성되어야 하며, 도면의 체계는 반드시「서산의료원 설계도면 작성 및 납품 편람」에 따라야 한다.

※ 설계도면작성및납품편람은 본원에서 제공 함.

(2) 공사비 내역서는 조달청 선정 시설공사응용프로그램과 호환이 가능한 프로그램으로 작성되어야 한다. 다만, 공종별 사용의 용이성을 고려하여 본원의 업무담당자와 협의하여 다른 프로그램을 이용하여 작성할 수 있다.

(3) 설계도서 간의 선, 글자 및 부호는 통일성을 갖추어야 하고, 도면내의 배치를 균형 있게 하여 도면의 이해와 식별이 용이하도록 하여야 한다.

(4) 설계도면과 시방서 등에 표기되는 내용(재료, 규격, 성능, 기준, 공법 등)은 서로 상이하지 않도록 하여야 한다.

(5) 성과품 작성시 장비의 성능, 유지 및 보수, 특수공법 등에 대한 상세한 설명 및 각종 주요 사항에 대한 기록유지, 산출근거 등을 정확하게 기록하여 운영시 기술적 참고 자료로서 가치가 있도록 한다.

(6) 성과품 작성시 인용된 참고자료는 출처를 명시하여야 한다.

(7) 각 분야별 세부공정계획서를 작성하되 예정공정표는 착공예정일을 5일차로 기준하여 공정 순으로 작성한다.

나. 세부내용

(1) 설계설명서 다음 사항에 대한 내용을 명기하여 서술식으로 요약하여 작성, 제출하여야 한다.

(가) 공사개요 : 위치, 규모, 공사기간 등

(나) 공사예정공정표

(2) 공사비 산출

(가) 공사비 산출은 회계예규 “원가계산에의한예정가격작성준칙”을 참고하여 작성한다.

(나) 공사비 적산은 정부표준품셈 및 각분야별 공사의 적산기준에 따라 산출한다.

(다) 공종별 단가는 실적공사비를 기준으로 하며, 자료가 불비한 부분은 표준품셈에 의하여 산출하고 특수공종은 제조원가 계산서 양식에 따른 양식으로 2개 업체 이상의 견적서를 받아 경제적인 단가를 택한다. 제조원가에 의할 수 없는 공종의 단가는 전문가 의 1식 견적으로 단가를 계상한다.

(라) 노임단가는 통계청이 승인한 건설업 임금 실태조사 보고서의 단가를 적용한다.

(마) 자재단가는 조달청 가격정보지를 우선으로 하며 물가정보, 물가자료, 거래가격 등을  참고로 하며, 적용단가는 최저단가로 한다.

(바) 수량산출서는 공종별, 구조물별, 규격별, 층별로 작성 후 총 집계 하여야 한다.

(사) 자재는 가능한 국산 자재를 사용토록 설계한다.

(아) 주요 자재수량은 별도 집계 작성한다.

(자) 설계내역서는 공사별로 작성하고 발주자가 집행할 수 있는 공사별로 구분하여 총괄내역서를 제출하여야 한다.

(차) 도면상으로 수량산출 내용이 불명확한 개소는 수량 산출시에 산출부분에 따라 스케  치를 첨부하여야 한다.

(3) 시방서

(가) 건설공사 표준시방서 등을 기준으로 하여 각 공정별로 상세하게 기술하여야 한다.

(나) 공사 시 신축건물과 간섭하여 시공의 상당한 주의를 요하거나 신공법, 신소재, 신기술 등의 적용이 필요한 경우 본 공정에 대한 제품사양서, 특별시방서를 작성 제출하여야 한다.

(다) 폐기물처리에 대하여 상세하게 기술하여야 한다.

(4) 설계도면

(가) 미터법을 사용하되 ㎜단위 및 아라비아숫자로 표기한다.

(나) 한글적용을 원칙으로하되 필요에 따라 영문표기도 가능하며 약자는 영문에 한해 보  통적으로 사용되는 범위내에서 사용하고 목록란에 명기 하여야한다.

(다) 구조물 작성도면과 기타 상세한 도해가 필요한 곳에는 상세도를 첨부하여 도면의    이해가 용이하도록 하여야 한다.

8. 보고회 개최

가. 일반사항

보고회는 아래와 같이 총 2회에 거쳐 개최하며 전기, 통신, 기계, 소방 등 관련 공종 대표와 협의하여 공동으로 보고회를 개최하도록 한다

(1) 기본설계 완료보고회 : 1회

(2) 실시설계 완료보고회 : 1회

나. 기본설계 완료보고회

(1) 보고자 : 대표 건축사 및 분야별 책임기술사

(2) 준비물

(가) 상황판 판넬(A2쪽 접이식)

1) 종합배치도(임시시설 및 주차, 동선계획 포함)

2) 평면도

3) 투시도 또는 조감도(스케치 가능)

(나) Power Point 설명자료 : 별도 협의

(다) 분야별 개략 공사비내역서

다. 실시설계 완료 보고회

(1) 보고자 : 대표 건축사 및 분야별 책임기술사

(2) 준비물

(가) 상황판 판넬(A2쪽 접이식)

1) 종합배치도(임시시설 및 주차, 동선계획 포함)

2) 평면도

3) 조감도

(나) Power Point 설명자료 : 별도 협의

(다) 분야별 공사비내역서

1) 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물 등 공종별로 분리하고 발주 단       위별(건축+토목+조경+기계설비,전기,통신,소방, 폐기물)로 내역을 작성하여야 한다.        (도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등)

2) 또한 공사용 관급자재는 철근, 레미콘, 시멘트 뿐만 아니라 공사용 자재 직접구매         대상품목 지정내역 고시(중소기업청고시 제2015-26호)로 지정 고시된 품목을 설계에        반영하고 발주처가 직접 구매할 수 있도록 관급자재로 분리작성 하여야 한다.

(관급자재 품목식별번호 기재)

9. 성과품 납품 목록

용역자는 성과품의 편집 및 인쇄 방법에 대해 발주처와 사전 협의하여야 한다.

가. 기본설계

종 류	규 격	수 량	단 위	형 태	비 고
도 면	A3	3	부	좌철	백상지
상황판	A2 (접이식)	1	부	-

나. 실시설계

(1) 공사비 내역서에는 원가계산서, 일위대가표, 자재단가비교표, 수량산출서가 포함됨.

(수량산출서는 3부만 제출한다)

(2) 성과품 납품도서에 표기하지 않은 도서도 발주청의 요청이 있을경우 납품하여야 함.

(3) 납품 설계도면에는 작성자 서명 날인하여야 함.

종 류	규 격	수 량	단 위	형 태	비 고
축소도면	A3	5	부	반 책	백도
설계설명서	A4	5	부	상단철	USB 포함
시방서(일반,특기등)	A4	5	부	“	“
공사비 내역서	A4	5	부	좌편철	“
공사비 내역서(철골자재 분리)	A4	3	부	좌편철	“
종합보고서	A4	5	부	상단철	“
각종 계산서	A4	3	부	“	“
상황판	A1 (접이식)	1	부	-
조감도	76cm*61cm(액자)	2	조		칼라사진 별도5부
USB	A1(접이식)	1	개		전체자료 저장

10. 면적표(Space Program)

발주처가 제시한 과업지시서의 내용을 바탕으로 작성하며, 건축계획의 적정을 기하기 위하여 사용자와 협의하여 일부 조정될 수 있으며, 설계자는 제시된 규모 범위 내에서 가장 합리적인 건축계획을 제시하여야 한다.

11. 증축위치도

위치도	세부 위치도

증축위치

12. 기타 특이사항

① 설계 용역자는 본 과업을 수행함에 있어 관련 부서와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토 반영하여야 한다.

② 설계용역 참여 기술자는 발주처 승인을 득한 후 결정한다.

③ 본 지시서가 충분하지 못할 때에는 계속 부분 과업지시서 및 변경 과업지시서를  생산하며, 본 과업 지시서와 동일한 효력을 발생한다.

④ 설계용역에 착수하기 전 착수계, 과업수행 계획서, 용역 수행자 명단 및 과  업수행에 필요한 서류를 계약부서에 제출하여야 한다.

⑤ 설계 용역자는 기본계획, 기본설계 및 실시설계 등을 진행함에 있어 충분한 자료를 수집하여 설계의 질을 높여야 하며, 창발성 및 선진성 (특히 지역경관과의 조화․건축적 형태미․기술적 가능성․친환경성․시민친화적 프로그램의 수용 역량 등)을 반영, 안전하고 경제적인 시설이 되도록 설계하여야 한다.

⑥ 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 발주자측이 필요하다고 인정하여  지시한 사항은 즉시 이행하여야 한다.

⑦ 설계 용역자는 본 과업과 관련된 해당 설계심의 회의에 참석 설명하고, 각  분야 및 기술사항에 대하여 책임기술자로 하여금 질의에 답변하도록 한다.

⑧ 본 과업의 착수와 동시 예정공정표를 작성하여 제출하여야 하며, 작업 분해표,  작업 목록표 등의 근거를 첨부한다.

⑨ 설계 용역자는 과업 수행중 발표회, 보고회, 심의회 등에 따른 Study Model, 확정 Model, 판넬제작 등의 자료 준비와 기타 발주자 필요에 의한 별도의 자료 요구에 따른 비용은 용역수급자 부담으로 한다.

⑩ 설계용역자는 건축, 기계, 토목, 조경 분야 설계도서에 따라 내역서를 작성하여 공사설계금액을 산출함에 있어, 공사발주를 위한 각 분야별 (건축ㆍ기계ㆍ토목ㆍ조경, 전기, 통신, 소방 등) 공사설계금액의 총합계(이하 “총합계”)가 예산범위 이내가 되도록 건축ㆍ기계ㆍ토목ㆍ조경 분야를 설계하여야하며 만일 상기와 같이 총합계가 예산 범위를 초과한 경우에는, 각 분야별(전기,통신,소방 등) 설계자와 협의하여 총합계가 예산잔액 범위 이내가 되도록 건축물 규모(연면적 등), 자재사양, 각종 전기ㆍ기계설비 및 부대시설 등을 재조정하여 그 조정안을 발주처(감독관)에 제출한 후 승인을 득하여야 하며, 승인을 득한 후 최종 설계도서 일체를(도면, 내역서, 시방서, 각종계산서 등) 재작성(수정)하여 용역준공예정일까지 최종 납품하여야 한다.

⑪ 용역수급인은 인테리어 설계가 필요한 실에 대하여 발주기관과 협의하여 인테리어 설계 후 내부투시도 시안(2개 안 이상)을 작성하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 대한 대가 및 최종 성과품(인테리어 내부투시도) 비용은 용역비에 포함된다.

⑫ 용역수급인은 용역 착수시 지형현황측량 및 지장물조사를 선행 실시하여 지장물조사서(지장물별 현황, 관리부서, 처리계획 협의내용 등을 수록)와 지형현황측량성과도를 제출하여야 하며, 지형현황측량성과도 작성 비용은 용역비에 포함된다.

⑬ 지형현황측량 시에는 T.B.M(가 수준점)을 부지 내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며 유실  또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시하여야 한다.

⑭ 용역수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

※ 공공시설물, 전기/통신/상․하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

⑮ 수급인은 기존 상수도 인입관로를 조사 및 하수처리를 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

⑯ 수급인은 사업 대상부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

⑰ 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계 하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에  반영하여야 한다.

⑱ 용역수급인은 발주청에서 사업부지에 대한 지적측량(경계복원측량 등) 시 현장에 입회하여 위치를 확인하고 점의조서(경계말뚝 조서)를 작성한 후 발주청에 제출하며, 시공자에게 점의 위치를 인계하여야 한다.

⑲ 용역수급인은 용역 착수시 관계법령 검토 및 의견조회 등 관련부서 사전협의 결과서를 참고하여 설계시에 반영하여야 한다.

⑳ 용역수급인은 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지사용계획서(또는 신재생에너지 설치계획서)를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의/승인을 받아야 하며, 사전협의 결과서를 제출하여야 한다.

㉑ 용역수급인은 신․재생에너지설비의 지원 등에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2015-153호, 2015.07.22.)에 의거 신․재생에너지 해당시 설계에 반영하여야 한다

㉒ 사인계획 : 내․외부 각종 안내판 및 공사용펜스 등에 대한 사인계획을 반영하여야 한다.

㉓ 용역수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사 및 “토석정보공유시스템(TOCYCLE)” 등을 활용하여 중간 및 실시설계 시 위치, 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 이 경우 공공사업 현장을 우선 고려하여 협의하여야 한다. 또한 비산먼지 방지 대책으로 세륜기 설치 등을 검토ㆍ반영하여야 한다.

㉔ 용역수급인은「건설현장 축중기 설치지침(국토해양부 훈령 제553호(2015.7.7.)」에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

※ 축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥이상인 건설공사

※ 10,000㎥이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

㉕ 용역수급인은 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 설계도서를 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

㉖ 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 할 경우 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행하여야함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고 철저히 지질조사 및 지질분석하여야 한다.

㉗ 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

㉘ 착수, 중간, 완료보고회 등 각종 보고회 준비, 개최, 별과 반영 등 보고회 수행 업무를 이행하여야 하여 인근 주민설명회가 필요시 이행하여야  한다.

㉙ 용역수급인은 각 분야별(건축, 토목, 조경, 설비, 전기, 통신, 소방) 실시설계 도서를 종합적으로 검토하여 향후 시공 시 분야별 도면 상이로 인한 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

㉚ 지질조사를 위한 지질조사 위치, 공수, 방법 등에 대한 지질조사계획서를 작성하고 지질조사에 적극 협조하며, 지질조사결과에 대한 검토하여 설계에 반영하고 검토보고서를 제출한다.

㉛ 보고양식에 관하여는 아래 양식을 표준으로 한다.

1. 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 :

□ 용역진행사항

구 분	금주진행사항 (2020. . .~2020. . .)	차주예정사항 (2020. . .~2020. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 건축, 토목, 조경, 기계 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	- 주요 협의사항이나 회의 등이 있을 경우 표기 - 문제점 및 해결책 등 표기

보고일 : 2020.   .   .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :	(인)

충청남도서산의료원장 귀하

2. 월간공정보고

월간공정보고(2020.  월)

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 :

□ 용역진행사항

구 분	금월 업무수행 내용	익월 업무수행 내용	비고 (실시%/예정%)
	2020. .~2020. . .	2020. . .~2020. . .
첫째주
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
특기사항	- 공정 지연 시 구체적 원인 표기

보고일 : 2020.   .   .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :	(인)

충청남도서산의료원장 귀하

3. 회의록

제 회	회 의 록
회의장소				회의일시		년 월 일 ( 시 분)
업무분류 체계번호				회의종류		일일, 주간, 월간, 특별, 수시
참석자	발 주 청				설 계 자			기 타
	성 명	서 명			성 명		서 명	성 명	서 명
특기사항
연 번	회의안건 제목		내 용							비고
1 2 3 4 5	“예” ○.공정보고 ○.현안사항 ○.업무처리실적 ○.향후 수행계획 ○.기타사항

작성자 : ○○건축사사무소 대표자 : ○ ○ ○ (인)